과학기술정보통신부	보도자료

보도시점	2024. 11. 5.(화) 12:00 (2024. 11. 6.(수) 조간)	배포	2024. 11. 5.(화) 09:00

국가 슈퍼컴 6호기

`26년 초 서비스 개시 목표로 사업 재개

슈퍼컴 6호기 구축비, 예타 대비 53% 증가한 4,483억 원으로 증액

신속한 슈퍼컴 6호기 도입을 위해 ‘24.11월 공고 추진 등 일정 가속화

연구‧산업 현장의 인공지능 활용, 거대정밀 계산 등을 위한 기반 지원에 단비

과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 ‘과기정통부’)는 11월 4일에 국가초고성능컴퓨팅위원회(위원장 : 과기정통부장관)를 개최하여, 핵심부품 시장가격 상승 등의 대외 환경변화를 반영하여 “국가 초고성능컴퓨터 6호기 구축계획”을 변경했다고 밝혔다. 동 구축계획의 주요 변경 내용은 국가초고성능컴퓨터 6호기(이하 ‘슈퍼컴 6호기’) 사업비를 종전 2,929억 원에서 4,483억 원으로 증액(1,553억원, 53% 증가)하는 것이다.

당초 슈퍼컴 6호기는 `25년에 서비스를 개시할 예정이었으나, 지난해 본격화된 생성형 인공지능 열풍으로 인해 초고성능컴퓨터의 핵심부품인 그래픽 처리장치(GPU) 수요가 폭발적으로 증가하면서 시장 가격이 급등하여 사업이 4차례 유찰된 바 있다. 이에, 과기정통부는 슈퍼컴 6호기 구축 사업의 원활한 추진을 위해 기획재정부의 ‘사업계획 적정성 재검토’를 통하여 대외 환경변화에 맞게 사업비와 사업추진방식 등을 개선(`24.10.31, 재정사업평가위원회)하였다.

과기정통부는 세계 10위권 수준의 슈퍼컴 6호기 구축을 위해 이번 달 내 신속하게 입찰 공고 절차를 착수하여, 시스템성능 600PF, 저장공간 200PB, 연결망(네트워크) 대역폭 400Gbps 이상의 초고성능컴퓨팅 체계를 구축할 예정이다.

※ 슈퍼컴 세계 500대(Top500) 등재 체계(시스템) 이론성능 순(`24.5월 기준) : 미국, Aurora, 1,980PF, 미국, Frontier, 1,714.8PF, 미국, Eagle, 846.8PF, 일본, Fugaku, 537.2PF, 핀란드, LUMI, 531.5PF
(이상 표기 순서 : 보유 국가, 슈퍼컴 명칭, 이론성능)

<국가초고성능컴퓨터 5호기, 6호기 비교>

그래픽 처리장치 중심으로 구축되는 슈퍼컴 6호기가 공식 서비스를 개시하면 최근 빠르게 발전하고 있는 인공지능 혁신 등의 세계 산업‧연구 환경변화에 능동적으로 대응하고, 대규모 과학‧공학 계산과 초거대 인공지능 분야의 연구개발을 보다 폭넓게 지원할 수 있게 된다. 또한, 슈퍼컴 6호기는 슈퍼컴 5호기(‘18.12~) 대비 활용 연산자원은 23배 이상 빨라지고, 저장공간도 10배 이상 넓어져 연구자들과 기업들이 연구에 마음껏 활용할 수 있는 보다 안정적인 연구환경 기반이 갖추어질 것으로 기대된다.

슈퍼컴 6호기는 기초원천 연구뿐만 아니라, 공공사회 현안, 산업 활용 등을 위해서도 연산자원을 지원할 예정이며, 특히 인공지능 기반 핵심기술 개발‧활용에 30%, 기존에 지원이 미비했던 산업 분야에도 자원의 20%를 우선 배분할 계획이다. 슈퍼컴 6호기는 평가를 거쳐 우수한 연구계획을 선정하여 기반 장치를 무상으로 제공하고, 이와 더불어 국가적으로 중요하거나 시급한 현안 해결 과제에 대해서는 신속 처리 제도를 운영하여 보다 신속하게 자원을 지원할 계획이다.

유상임 과기정통부 장관은 “인공지능 등의 우리나라 국제 과학기술 경쟁력 강화를 위해 초고성능컴퓨팅 기반 수요가 급상승하고 있다”며, “이에 핵심 기반인 슈퍼컴 6호기를 신속하게 도입하여 새로운 과학기술 발견과 연구개발 혁신 그리고 산업경쟁력 강화에 기여하겠다.”라고 밝혔다.

담당 부서	과학기술정보통신부 원천기술과	책임자	과 장	이은주	044-202-4540
		담당자	사무관	이동근	044-202-4546
	한국과학기술정보연구원 국가슈퍼컴퓨팅본부	책임자	본부장	이 식	042-869-1039
		담당자	센터장	홍태영	042-869-0667

붙임		국가 플래그십 초고성능컴퓨팅 인프라 고도화 사업 개요

□ 사업 개요

○ (목적) 초고성능컴퓨터 6호기 구축을 통한 연구․산업 현장의 거대계산, 데이터분석, AI활용 지원으로 과학‧산업‧공공 부문 혁신 창출 기여

※ 1호기(’88～’93) → 2호기(’93～’01) → 3호기(’02～’07) → 4호기(’08～’17) → 5호기(’18～)

○ (주요내용) 세계 10위권 수준인 600PF급 이상의 이론성능을 갖춘 HW, 시스템SW 및 기반시설(수배전, 냉각 등) 구축, 시스템 유지‧관리

○ (사업기간 / 예산) `23년~`31.2월 / 4,482.57억원

	< 적정성 재검토 결과에 따른 주요 변경사항 >
◇ (총사업 기간) `23.1. ~ `28.12.(총 6년) → `23.1. ~ `31.2.(총 8년 2개월) ※ 초고성능컴퓨터 6호기 구축 완료 이후 예산 지원이 필요한 유지보수, 상용SW 등 소요 기간을 고려하여 총사업 기간 연장 ◇ (총사업 예산) 2,929.49억원 → 4,482.57억원(1,553억원 증액, 53% 상승) ※ 국내외 대규모 초고성능컴퓨터 구축 사례, 주요 초고성능컴퓨터 제조사 견적서 등을 토대로 산출한 사업비 증액분 반영 ◇ (사업추진 방식) 초고성능컴퓨터 제조사 입찰 참여 유인 및 금융비용 감소를 위한 시스템 구축+유지보수 통합 입찰, 선금 지급 및 자금조달 방식(은행차입) 개선

□ 향후 계획                ※ 사업자 입찰 현황 등에 따라 일정 변동 가능

○ 6호기 시스템 입찰 공고*(`24.11월)~ → 사업자 선정 및 계약 체결 → 6호기 구축 → 베타서비스 → 공식서비스 개시(`26.上 목표)

* 사전공고(10일간) → 공고문 이의신청(7일간) → 5차 공고(40일간)